(주)에스이그린에너지 경상정비 위탁용역

용 역 시 방 서

2024. 05.

- 목   차 -

Ⅰ. 일 반 시 방 서

Ⅱ. 특 기 시 방 서

Ⅲ. 과 업 내 역 서

Ⅰ. 일반시방서

1. 일반사항

가. 본 용역은 (주)에스이그린에너지 발전설비 위탁정비용역에 적용하며, 계약대상자는 본 시방서, 특기시방서 등에 의거하여 용역을 시행해야 한다.

나. 본 시방에 명시되지 않은 사항이라도 발주자가 발전소 운영 및 시설 검검·정비 위탁용역 업무와 관련하여 원활한 업무 수행 및 운영을 위하여 필요하다고 인정하여 요청하는 사항에 대하여 계약상대자는 적극 협조하여야 한다.

2. 협조 및 의무

가. 발주자는 본 용역을 관리하기 위하여 용역감독직원(이하"감독원"이라함)을 임명하여 용역 업무의 이행사항 점검, 계약상대자에 대한 협의 및 타 부서와의 협조 등의 업무를 총괄하도록 한다.

나. 계약상대자는 용역 설명서에 명시한 자격을 갖춘 인력을 현장에 상주하게 하고, 발주자의 요청 및 협조사항 처리 등 계약 관련 업무에 있어서 계약상대자를 대표한다.

다. 발주자와 계약상대자는 용역 업무의 계획 수립, 준비, 수행 및 결과 확인 등 용역 업무와 관련된 사항에 대해서 상호 협의 및 협조를 통하여 용역 업무가 원만하게 수행되도록 한다.

라. 발주자는 용역 시행 중 필요한 경우 회의를 소집할 수 있고, 계약상대자는 회의에 참석하여 필요한 사항을 협의하여야 한다.

마. 계약상대자는 용역의 진행 과정, 업무내용, 인력 운영사항 및 기타 용역과 관련된 일체의 내용을 기록하여 보관하여야 하며, 발주자의 요구가 있을 때에는 제출하여야 한다.

바. 계약상대자는 용역 수행을 위하여 발주자로부터 제공받은 설비, 장비, 설계도, 자료등 일체를 용역 준공 시에 반납하여야 한다.

사. 계약상대자는 효율적인 용역 업무 수행을 위하여 “일반 및 특기시방서” 내용을 소속 직원들이 숙지하고 이행할 수 있도록 교육시켜야 한다.

아. (주)에스이그린에너지에 대한 대내․외 신뢰유지를 위하여 용역 업무에 종사하거나 종사하였던 계약상대자 또는 소속 직원은 그 직무상 알게 된 정보나 지식의 왜곡된 전파 또는 용역업무 이외의 목적에 이를 이용해서는 아니 된다.

사. 발주자는 (주)에스이그린에너지의 점검·정비 위탁용역의 계약상대자 중 부정한 계약상대자에 대해 계약해지를 한 경우라도 계약상대자에게 인력 유지를 요청할 수 있으며, 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

3. 용역관리

가. 계약상대자는 용역계약 체결 후 용역착수와 동시에 용역착수계를 제출하고 아래 서류를 제출기한내에 감독부서에 제출하여야 한다.

순번	제출서류	제출시기
1	용역 착공계 2부	착수 3일전
2	용역 수행계획서 2부 - 인력구성계획, 인력 투입․배치․운영계획, 비상연락망, 정기 및 비정기 보고서 작성 및 제출계획, 용역업무에 필요한 각종 자재 및 소모품의 사용계획 등.
3	용역비 내역서 2부
4	현장대리인 선임계 2부
5	보안·안전관리 계획서 2부
6	투입인력의 이력서, 자격증 사본, 학력증명서를 포함한 사실인정 증빙서류와 기술자격 등급 사정내역서 각 2부
7	기타 발주자가 요구하는 내용	별도 협의
8	준공계	준공시

나. 발주자는 가항에 의거 제출받은 서류를 검토하여 계약불일치 사항 및 업무수행에 지장을 초래 할 수 있는 사항 등에 대하여 계약상대자에게 시정 또는 보완을 요구할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 지체 없이 시정 및 보완조치를 하여야 한다.

다. 용역 업무 착공일은 계약상 불일치가 없거나 발주자가 요청한 시정 및 보완조치가 완료되었다고 발주자가 인정한 날로 한다. 단, 시정 및 보완조치내용이 용역 수행에 지장을 초래하지 않는 경우에는 조건부 착공을 할 수 있다.

라. 계약상대자는 용역 수행 전에 설계서 및 시방서를 면밀히 검토하여 용역 수행에 지장이 없도록 하고, 용역수행 계획서를 충실히 작성하여 제출하여야 한다.

마. 계약상대자는 본 용역에 투입된 계약상대자 직원이 정당한 용역 업무를 수행하지 않을 경우 적극적인 조치를 취하여 용역업무를 원활히 수행해야 하며 계약상대자 직원의 직무 소홀 등으로 발생하는 용역 업무의 손실은 계약상대자가 진다.

바. 본 용역 수행에 따른 다음의 사항에 소요되는 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

- 설비 오조작, 운영 미숙과 고의적으로 발주자에 손해를 미친 금액 전부

- 자체 및 필수교육, 대체근무 비용 등

사. 계약상대자는 계약상 준공일에 용역을 완료하고 감독부서에 준공검사를 요청하여야 하며, 발주자는 계약상의 불일치가 발견되면 계약상대자에게 시정 또는 보완을 요구할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 지체 없이 시정 및 보완조치를 하여야 한다.

아. 본 용역관련 공무관리의 제반 서식 및 양식은 발주자가 정한 규격을 사용해야 하며 발주자의 규정에 명시되지 않은 서식 및 양식은 감독부서와 협의하여 확정한 후 사용하여야 한다.

4. 노무관리

가. 계약상대자는 투입인력 중 발주자가 아래 사항에 해당된다고 판단하여 통보할 경우에는 귀책사실을 조사·확인한 후 그 결과에 따라 교체 등 적절한 조치를 하여야 한다.

- 해당 용역 업무 수행능력이 현저히 부족하다고 인정될 때

- 업무 태만, 해태, 지연, 시위행위 등으로 발주자의 업무수행을 방해하거나 용역

업무에 지장을 초래한 경우

- 고의 또는 중대한 과실로 발주자에게 인적, 물적 손해를 끼쳤을 때

- 발주자의 대외 이미지를 훼손하거나 용역 업무에 지장을 초래하였을 때

- 직무상 알게 된 정보나 지식의 왜곡된 전파 또는 용역 업무 이외의 목적에 이를

이용한 때

- 기타 용역 업무가 이루어지는 작업장의 질서를 문란케 하였을 때

나. 계약상대자는 용역 수행 중 상기 가항의 사유에 의한 발주자의 통보 또는 계약상대자의 불가피한 사정으로 교체를 할 경우에는 용역설명서에 명시한 투입요건에 적합한 인력으로 교체하여야 한다.

다. 상기 가항의 1호의 사유로 교체된 인력은 계약상대자가 재교육 후 평가하여 업무수행능력이 인정될 경우에 한해서 재투입 할 수 있다.

라. 계약상대자는 용역설명서에 명시한 투입요건을 만족하고 해당 직급 이상인 인력을 투입하여야 한다.

마. 근무시간 및 근무형태

계약상대자의 통상근무일 및 근무시간은 발주자의 통상근무일 및 근무시간에 준하여 시행한다.

사. 인원 유지

- 계약상대자는 휴가, 교육, 출장 등으로 3일 초과시 충분한 경험과 기술력을 갖춘 대    체인력을 제공하여야 한다.

(단, 사전에 발주자의 사전협의를 하여야 하며, 사전협의 후 시행한 사항에만 인정한다.)

5. 시설 및 장비관리

가. 발주자는 계약상대자의 과업 수행을 위한 업무장소는 지정하여 운영하므로 계약상대자에게 제공한다.

나. 계약상대자는 발주자로부터 제공받은 시설을 임의 변경하거나 제공된 용도와 다르게 사용할 수 없다.

다. 발주자로부터 제공받는 시설 및 장비는 발주자가 인정하는 경우에 한하여 용역 수행상 필요 시 추가할 수 있다.

라. 계약상대자는 시설이나 장비를 항상 청결한 상태로 유지하고, 사용 전·후 점검하여 이상 유무를 확인하여야 하며, 사용 중 또는 점검 결과 이상이 발견된 경우에는 즉시 감독부서에 통보하여야 한다.

마. 발주자는 용역 수행 중에 계약상대자 또는 그 소속 직원이 고의 또는 과실로 인하여 시설이나 장비를 손·망실하거나 고장이 발생한 경우에는 변상 조치하여야 한다.

6. 보안관리 및 안전관리

가. 계약상대자는 투입인력에 대하여 신원조사를 위한 증명서를 발주자가 요청시 관련 부서에 제출하여야 하며, 신원조사 결과 부적격으로 판정된 자를 투입하여서는 아니 된다.

나. 계약상대자는 용역 수행 중 발전소에서 취득한 보안사항은 일체 외부에 누설하지 않아야 하며, 외부 누설로 인한 보안사고나 발주자에 손실이 발생할 경우 원인 제공자와 계약상대자가 모든 책임을 진다.

다. 계약상대자는 발전시설 점검정비 위탁용역 업무 수행과 관련하여 안전관리 및 안전사고에 대한 총괄적인 책임이 있으며, 계약상대자의 귀책사유로 화재 및 산업안전사고가 발생한 경우에 계약상대자가 민․형사상 모든 책임을 진다.

라. 계약상대자는 투입인원에게 산업안전보건 관련 법령 및 절차에 의거 소정의 안전교육 및 안전조치를 강구하고, 안전위해요인 제거 및 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

마. 계약상대자의 사무실 사용과 관련된 인적, 물적 손실 및 보안사고 등에 대한 책임은 계약상대자가 진다.

바. 계약상대자는 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 안전관리 규정 및 발전소 절차서 등을 준수하여야 하며, 업무 수행 중 부주의로 인하여 발생된 사고의 모든 책임은 계약상대자가 진다.

사. 계약상대자는 용역 업무 수행을 위해 발주자로부터 대여 받은 도면, 자료 및 각종 용품은 감독부서의 허가 없이 발전소 외부로 반출하여서는 아니 되며, 용역 준공 시 반드시 발주자에게 반납하여야 한다.

7. 용역품질 및 복무관리

가. 발주자의 감독부서 등은 계약상대자가 본 시방서에서 요구한 관련 요건을 준수하지 않을 경우 시정을 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라 조치하여야 한다.

나. 계약상대자는 모든 용역 전반에 대한 적정성을 증빙할 기록을 작성·유지하여 발주자 및 규제기관의 검사 및 감사 시 사용할 수 있도록 하여야 하며, 준공 시 발주자에게 인계하여야 한다.

다. 근무인원 및 근무방법 등은 특기시방서에 정한 바에 따르며, 노동관계법 등 제반 법률에 위배됨이 없이 효율적인 용역 수행이 이루어지도록 근무계획을 감독자와 협의하여야 한다.

8. 교육 훈련

가. 계약상대자는 관련 법령에 의거한 분야별 법정 의무교육 및 특기시방서에 정한 교육을 이수토록 하고 그 결과를 감독자에게 보고하여야 한다.

나. 계약상대자는 용역수행계획서 제출 시 용역역무 수행에 필요한 직무교육, 안전교육 등 교육을 이수토록 하고 그 결과를 감독자에게 보고하여야 한다.

다. 계약상대자는 교육훈련을 위해 지급된 훈련자료 및 자재에 대하여 철저히 관리하여야 하고 부주의로 인한 손·망실 시에는 변상하여야 하며, (주)에스이그린에너지의 승인이 없이 외부 반출을 할 수 없으며 발전설비 정비용역 업무 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

9. 보유장비 등

가. 계약상대자는 용역 수행에 직접 수반되는 장비(차량, 수공구, 공기구 등) 및 산업안전보건법 등 관계 법령이 지정하는 안전장구류 인계인수를 철저히 수행하며, 용역 만료 시에는 인계인수된 장비에 대한 유지관리 결과를 제출하여야 한다. 감독자가 지정하는 기일 내에 확보하여 현장에 비치하여야 하고 감독자의 사전 승인 없이 반입, 반출할 수 없다

나. 계약상대자는 가항에 의하여 보유하고 있는 장비 등은 법정 점검 및 검·교정을 필하고, 항상 정상 기능으로 유지되도록 관리하여야 한다.

다. 감독자는 계약상대자와 협의 후 특정 공기구 및 장비에 대해서는 업무의 능률을 향상시키기 위하여 한시적으로 무상으로 대여할 수 있으며, 계약상대자의 부주의로 인한 고장 등의 손실이 발생한 경우 계약상대자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

라. 계약상대자가 보유 필요하다고 판단되는 장비에 대한 범위는 특기시방서에 별도로 정하며, 발주자가 제공하지 않는 장비는 필요에 따라 발주자가 승인한 물품에 대해 감가상각 형태로 계약상대자가 보유할 수 있으며 감가상각 기준은 발주자 규정에 따른다.

10. 계약의 해지 및 해제

가. 발주자는 계약상대자가 다음 각 호에 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해지 할 수 있으며, 이 경우 발주자는 일체의 보상 및 배상책임을 지지 않는다.

- 정당한 이유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지 아니할 경우

- 계약상대자의 귀책사유로 인하여 용역수행기한까지 당해 용역을 완료하지 못하거나 완료할

가능성이 없다고 인정될 경우

- 정당한 이유 없이 계약상대자가 본 계약의 해약을 요구하였을 때

나. 기타 계약조건을 위반하여 발주자의 시정요구를 받았음에도 불구하고 시정하지 않는 경우

다. 계약을 해지 및 해제하고자 할 경우에는 업무 공백을 방지하기 위하여 적어도 2개월 전에

발주자와 계약상대자 쌍방이 그 사유를 통지하여야 하며, 계약이 해지 및 해제되거나 계약기

간이 만료되어 발주자가 타 업체와 계약을 체결한 경우에 계약상대자는 (주)에스이그린에너지

용역 업무가 지속적으로 수행될 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

11. 비치문서

계약상대자는 특기시방서에 정한 문서를 비치하고 기록·보존하여야 하며, 계약 종료 시점에 비

치서류를 감독자에게 이관하여야 한다.

12. 계약 내용의 변경

관련 법규의 제정·개정, (주)에스이그린에너지 시설의 확장, 개량 및 철거 등으로 계약 내용의

변경 사유가 발생할 경우 또는 기타 사유로 계약 내용을 변경하고자 할 경우에는 해당 분야의

인원을 가감하여 본 계약 내용을 상호 협의하여 변경할 수 있다.

13. 문서 및 서류의 귀속

본 용역관리 업무 수행과 관련한 각종 문서 및 일지 등은 일체 발주자의 소유로 하고, 계약 상

대자는 계약 종료와 동시에 이를 감독자에게 반환하여야 한다.

14. 계약기간 연장

가. 본 계약의 계약기간은 2년으로 한다.

나. 용역기간 종료 후 발주자 등의 사정으로 차기 계약이 지연될 경우 새로운 계약이 체결되기 전까지 계약기간을 연장할 수 있다.

15. 보수용 자재 공급

가. 발전설비 보수관리에 소요되는 보수용 자재(부속품 및 완성품)는 발주자가 공급한다. 다만, 발주자가 보유하고 있지 아니한 자재로서 긴급 또는 부득이한 경우에는 계약상대자는 자체 구입하여 사용할 수 있다.

나. 보수관리에 소요되는 소모용 재료는 계약상대자가 부담하고 적정 재고량을 확보하여 보수작업에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 계약상대자가 공급하는 재료 등은 발주자와 협의하여 사전 동의를 받아야 하며, 필요시 증빙자료를 제출하여야 한다.

16. 기타

가. 계약상대자는 본 용역안내서에 명시되지 않은 제반 사항은 관련 법령, 발주자의 제 규정을 따른다.

나. 발주자는 계약상대자가 용역계약을 위반하거나 발주자의 정당한 요청에 불응하는 경우 관련법, 계약서, 시방서 및 발주자의 제 규정에 따라 계약 불이행 관련 조치를 취할 수 있다.

다. 계약상대자는 본 용역을 위해 투입한 인력 관리에 대한 일체의 책임을 지며, 발주자의 제 규정을 위반하여 발생한 인적 및 물적 손해는 계약 상대자가 변상하여야 한다.

Ⅱ. 특기시방서

제1조 (목적)

경상정비용역은 철저한 일일경상 및 예방점검ㆍ정비로 발전설비의 안정된 운전을기하고, 긴급정비를 위한 정비인력 동원체계 확립으로 전력수급의 원활을 기하며, 발전설비의 신뢰도와 가동률을 제고하는데 그 목적이 있다.

제2조 (용어의 정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 기기점검수리의뢰서(Trouble Memo, 이하□TM□이라 한다)

경상정비용역 역무범위 내의 작업으로서 점검, 조정, 확인사항 또는 고장, 결함사항 등을 정상화하기 위하여 발주자의 발행부서에서 발행하는 점검 및 수리의뢰서를 말한다.

2. 예방점검

대상설비의 운전중 또는 일시 정지중인 상태에서 정비원이 순회하면서 계획된 점검주기에 따라 설비 또는 기기를 점검, 진단, 분석업무를 수행하고 데이타(Data)를 기록, 관리하는 작업을 말한다.

3. 예방정비

예방점검 결과에 따라 설비의 운전중 또는 일시 정지중인 상태에서 기기의 결함부위를 정비하거나 기기를 분해하여 이상 유무를 점검하는 작업 또는 계획된 정비주기에 따라 단위기기의 분해, 점검(Overhaul)정비를 수행하는 작업을 말한다.

4. 용역통보서

경상정비업무 수행상 발주자가 계약상대자에게 기 통보된 작업내용의 변경, 자재지입, 기간변경, 용역 중지ㆍ재개, 용역방법 변경, 장비ㆍ기계기구 임차 등을 통보하기 위하여 필요시 발행하며 또한 발주자가 설비 운영상 필요한 경우 계약상대자에게 통보하는 제반사항의 전달 수단으로 활용할 수 있다.

제3조 (역무범위)

연료전지 부대설비 경상정비용역에 포함되는 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연료전지를 제외한 부속설비(송전선로 포함)의 주기적 예방점검, 예방정비 수행과 작업 의뢰서 및 고장수리 의뢰서(TM) 처리

2. 설비 고장의 돌발복구 및 지원

3. 용역 안전관리 및 보안관리

4. 경상정비에 필요한 자재의 관리

5. 발주자에 대한 정기적인 용역업무 및 계획, 진행사항 보고, 정비 작업 전후 정리정돈, 청소

6. 연료전지를 제외한 경상정비에 필요한 공구, 계측기 및 발전소 시설전반에 대한 운영과 유지보수 관리

7. 발주자가 동 용역과 관련하여 통보하는 모든 제반 업무

8. 도시가스 정압기

- NG Gas Leak 점검

- 경보기 점검 등

- 가스정압기 점검 등 업무지원

9. 품질관리 및 정비기술 관리

- 정비관련 절차서 작성 및 이에 따른 정비

- 정비작업 후 작업 기록 및 유지

- 정비기술 개선 및 기록 유지

- 품질보증계획서 및 품질관리 절차서에 따른 품질관리 관련 업무

10. 연료전지를 제외한 설비에 대한 법정검사(인허가 등) 업무지원

11. 소방설비 작동기능점검 업무지원

12. 22.9kV 송전선로 수목 가지치기 작업(연 1회)

- 4~5월 중 시행(용역계약기간 중 총2회 시행)

13. 22.9kV 송전선로 맨홀 점검(연 1회)

- 10~11월(1회) 시행(용역계약기간 중 총2회 시행)

- 송전선로 맨홀 점검 시 양수작업, 열화상 검사 포함

- 조암변전소 내 케이블점검, 열화상 검사 포함

14. 발전소 내 수목 정리

- 발전소 내 수목 정리 및 제초 작업(연 1회), 제초제 살포(연 2회)

※ 발전소 내 울타리 부분 잡초 제거 포함

15. 기타 발주자 요청 시 업무 지원

16. 전기안전관리자 직무고시 이행

- 전기안전관리자 직무고시에 명시된 주기별 점검항목 측정 및 시험

※ 점검 종류 및 시험항목, 주기는 Ⅲ.과업내역서 제3조 경상정비 용역범위 참고

제4조 (역무 수행)

1. 계약상대자가 본 계약과 관련하여 역무를 수행하여야 할 장소는 (주)에스이그린에너지 연료전지 발전소 운영과 관련된 장소를 말한다.

2. 신규업체와 본 공사의 계약 체결시 본 계약 기간 중 인수인계 기간을 운영할 수 있으며 인수인계 기간 중 투입인력의 규모는 총 투입인력의 50% 이내에서 운영이 가능하며 실적정산 한다. 단, 업체가 변경되었으나 기존인력이 신규업체에서 계속 근무 시 해당인원은 신규 투입인력으로 간주하지 않는다.

3. 신규 낙찰자는 기업업체로부터 운전자료 및 정비자료, 기기이력사항에 대하여 철저히 인수받아야 하며, 착공일 이후 발생되는 역무에 대하여 책임을 진다.

4. 기존업체가 최종 낙찰자로 선정되었을 경우에는 2항 및 3항의 적용을 받지 아니한다.

제5조 (책임과 의무)

1. 계약상대자는 기기별 경상정비 계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

2. 계약상대자는 발주자의 계획된 발전업무를 수행하는데 지장이 없도록 역무를 충실히 수행할  의무가 있다.

3. 계약상대자는 보수분야에 충분한 경험과 기술력을 갖춘 인력을 제공하여야하며, 보수품질   을 확보할 수 있도록 최선을 다하여 설비를 안정적으로 운영한다.

4. 계약상대자는 투입인력의 역무수행능력 확보를 위한 교육훈련의 책임이 있다.

5. 계약상대자는 본 사업수행에 따른 인명 및 설비안전에 대한 책임이 있다.

6. 계약상대자는 발주자가 제공하는 모든 설비 및 자료에 대해 성실히 관리해야 하며, 이의  훼손 시 자체비용으로 원상회복의 책임이 있다.

7. 계약상대자의 명백한 보수결함으로 해당 기기가 심하게 손상되거나, 이로 인한 파급사   고가 현저할 경우, 계약상대자 비용으로 원상복구해야 한다.

8. 계약상대자의 점검 및 부주의 등의 원인으로 고장 또는 파손이 발생될 때에 이를 책임   지고 해결하여야 하며 보수에 필요한 비용은 청구할 수 없다.

9. 계약상대자는 본 용역의 원활한 수행을 위하여 발주자가 역무에 관한 통보  사항이 있을시 이행하여야 하며, 이를 불이행함으로써 발주자의 손실이 명백히 예상될 경우 발주자 별도의 조치를 강구할 수 있으며, 이에 소요되는 비용은 대가에서 공제할 수 있다.

10. 계약상대자는 발전설비 특성상 필요한 기동력을 갖추고 휴일 및 야간에 비상연락 체제를 유지하여 긴급동원에 항시 대비하여야 한다.

제6조 (역무관리)

1. 계약상대자는 착수전에 착수계 및 용역수행 계획서를 제출하여 승인을 득해야 하며, 계획서에는 조직표, 공정표 및 정비인력 이력서, 경력기록, 보안각서, 품질보증 계획서, 안전관리 계획서 등이 포함되어야 한다.

2. 발주자는 안정운전을 위해 필요시 대기근무, 휴일근무를 지시 할 수 있으며 용역대가 지급 시 실비 정산 지급한다.

3. 본 용역을 위해 투입한 계약상대자 직원에 대한 관리책임은 일체 계약상대자가 지며, 발주자측의 제 규정을 위반하여 발생한 물적 손해는 계약상대자가 변상할 책임이 있다.

4. 경상정비에 투입된 인력이 감독원의 정당한 지시에 순응치 않았을 경우 감독원은 작업 중지를 지시 할 수 있으며 이로 인한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

5. 기타 역무와 관련된 일체의 사항을 기록 보관하여야 하며 발주자가 요구하는 모든 자료를 제출하여야 한다.

6. 계약상대자는 용역인력을 현장에 상주시키고 기술자의 기술능력향상과 효과적인 업무수행이 되도록 최상의 조치를 취해야 한다.

7. 계약상대자가 제공한 자사 보수직원을 교체할 필요가 있을 경우, 계약상대자는 반드시 발주자 측과 사전협의하고 발주자의 승인을 득한 후 보수 직원을 교체하여야 한다.

8. 발주자는 현장상황에 맞추어 계약상대자가 제공한 보수원의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 반드시 발주자의 요구에 따라 지정된 기일내에 교체하여야 하며, 동 사유로 인하여 교체된 인력은 재투입 할 수 없다.

9. 계약대상자는 용역업무 수행 시 제반 사항은 발주자와 사전 협의하여야 하고 발주자의 감독 하에 수행하여야 한다.

10. 계약상대자는 용역에 투입된 인력에 대하여 역무수행과 관련된 모든 책임을 지며, 계약위반 및 불응으로 인한 용역대가 삭감이나 기타조치에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

제7조 (기술관리)

1. 용역은 발주자와 계약상대자 직원 간 상호 협의하여 최선의 방법으로 완벽하게 용역을 수행        하여야 한다.

2. 계약상대자는 용역을 완료하고 당해 기기의 용역 내용을 정리하여 발주자에게 제출하여        야 한다.

3. 계약상대자는 주요기기에 대한 경상정비 절차서를 작성하여 발주자의 승인을 받아야 하며        절차서 개정시에도 이에 준한다.

4. 계약상대자는 발전설비에 관한 설명서, 운전교본, 도면 및 참고서 등 발주자가 소유한   제반 기술 자료를 용역업무에 활용할 수 있으며, 발주자는 계약상대자의 요청 시 적극협조하여야 한다. 다만, 보안에 관계되는 기술 자료의 활용은 제한할 수 있다.

제8조 (계약상대자 변경 시 정비업무 인계•인수)

1. 역무수행 중인 사업장의 계약상대자 변경 시 기존 계약상대자와 신규 계약상대자는 최소 1개월 이상의 정비업무 인계ㆍ인수를 수행하여야 하며 발주자는 기존 계약상대자에게 계약연장을 통보할 수 있다. 단, 인수·인계기간 중 정비책임은 기존 계약상대자에게 있으며 신규 계약상대자의 임의조작 등으로 인한 정비책임은 신규 계약상대자에게 있다.

2. 인계인수기간 및 수행역무 범위는 다음과 같다. 기존 계약상대자 및 신규 계약상대자는 인수·인계 종료 시까지 해당 사업장의 인원을 유지하여야 한다.

《정비업무 인수·인계기간 중 신규 계약상대자의 수행역무 범위》

□ 1∼3 주차

○ 설비진단, 업무계획서 작성 ○ 정비절차서 및 지침서 보완

○ 정비조직 및 체계 구축 ○ 정비용 장비, 공기구의 현황 파악, 인수 및 보충

○ 각종기기 운전 및 정비이력 파악 ○ 각종 도서, 도면 보강 및 숙지

○ 단순 정비업무 참여 - 기존 계약상대자의 정비역무 일부 보조

○ 발주자가 동 공사와 관련하여 통보하는 제반업무 등

□ 4 주차

○ 실제적인 정비조직 운영 ○ 정비업무 참여 - 기존 계약상대자의 정비역무 보조

○ 각종 도서, 도면 재정비 ○ 정비원 교육 및 정비절차 숙지

○ 정비절차서 및 지침서 보완 ○ 발주자가 동 공사와 관련하여 통보하는 제반업무 등

3. 기존 계약상대자는 신규 계약상대자가 원활히 정비업무를 인수할 수 있도록 협조하여야 하며, 필요한 제반자료를 성실히 이관하도록 하여야 한다.

① 기존 계약상대자가 발주자의 역무사업소 및 역무범위에서 취득한 기술자료는 발주자의 요청 시 제출하여야 하고, 발주자는 이 자료를 계약상대자 변경 시 원활한 인계·인수를 위하여 신규 계약상대자에게 제공할 수 있으며 기술자료의 범위는 아래와 같다.

가. 정비절차서 및 정비지침서 나. 설비도면 다. 각종 매뉴얼 라. 설비별 운전 및 정비이력

② 계약상대자 변경 시 원활한 인계·인수를 위하여 기존 계약상대자는 발주자의 입회하에 신규 계약상대자에게 Man-to-Man 형태로 업무 인수·인계를 하여야 하고 인수·인계 형태는 아래와 같다.

가. 기존 계약상대자의 정비현장에 신규 계약상대자의 입회 및 보조역할 수행

나. 기존 계약상대자와 신규 계약상대자 간의 주 1회 이상 정비기술협의회 개최

다. 기존 계약상대자의 설비별 담당자와 신규 계약상대자의 설비별 담당자 간의 1:1 전수제도 운영

③ 계약상대자 변경 시 원활한 인수·인계를 위하여 발주자가 요청할 경우 기존 계약상대자는 보유 중인 발주자 소유의 특수공기구 및 정비공기구 목록을 제출하여야 하며, 기존 계약상대자 소유의 특수공기구 및 정비공기구의 외부 반출 시에는 반드시 발주자의 사전 승인을 받아야 한다.

4. 기존 계약상대자 및 신규 계약상대자는 제2항 및 제3항과 관련한 인수·인계 계획을 사전에 수립하여 발주자의 승인을 받아야 하며, 인수·인계 결과는 발주자가 정한 주기(일일, 주간 등)에 따라 보고하고, 매월 1회 발주자의 감독부서에 통보하여야 한다. 또한, 분기별 기성고 검사 요청 시에는 인수·인계내용, 진행사항 및 미결사항에 대한 사유 등을 종합하여 서면으로 보고하여야 한다.

5. 기존 계약상대자가 신규 계약상대자로 선정되었을 경우에는 제1항부터 제4항까지의 적용을 받지 아니한다.

제9조 (정비의 방법 및 책임)

1. 경상정비공사의 정비방법은 다음 각 호와 같다.

① 계약상대자는 발전설비 운전ㆍ정비 설명서 및 절차서를 활용하여 정비를 수행하여야 한다. 특히, 발전정지를 유발할 수 있거나 정상운전에 지장을 초래할 수 있는 기기의 정비업무 수행 시에는 사전에 관련도면, 지침서 및 절차서 등을 참고로 작업계획을 수립하고 반드시 발주자의 작업허가를 득한 후 수행하여야 한다. 또한, 감독부서의 작업허가가 필요한 작업을 임의 수행하여 발생한 책임은 계약상대자가 진다.

② 설비의 안정운전을 위하여 긴급정비가 예상되는 경우에는 발주자의 요청에 따라 교대 및 대기근무를 시행하여야 하며 계약상대자는 인력운영 방법을 강구하여 별도의 비용이 발생되지 않도록 조치해야 한다.

2. 경상정비공사의 정비책임은 다음 각 호와 같다.

① 계약상대자는 능률적인 작업수행과 정비요원의 자질향상, 기술능력이 있는 정비인력의 확보, 안전작업 수행 및 완전정비에 대한 책임이 있으며, 이를 회피하거나 태만하여 발생된 책임은 계약상대자의 대표사가 진다.

② 계약상대자는 제3조(역무범위)의 역무를 실시함에 있어 소정기간 내에 완료하지 못하였거나 계약상대자의 귀책으로 발전에 지장을 초래하게 하였을 경우 기성고 검사 시 아래 내용에 따라 산출한 지체상금 또는 벌과금을 발주자의 해당 사업소에 납부하여야 한다.

가. 작업지시 지체상금

[해당 설비 경상정비 연간 계약금액 × 경상정비공사 작업의뢰 또는 기기점검 수리비율÷2] × 지체상금률 × 지연일수

(1) 산정기준 : 1건 기준 (예방분해정비는 작업지시 지체상금에 준하여 계산)

나. 예방점검 지체상금

[(해당 설비 경상정비 연간 계약금액 × 경상정비공사 예방점검정비비율 × 해당 설비별 점유비율)÷2] × 지체상금률 × 지연일수

(1) 산정기준 : 1건별 기준

(2) 지연일수 : 작업오더의 확정종료일을 기준하여 실제종료일 지연일수

(3) 작업지시 또는 기기점검 수리비율, 예방점검 정비비율, 해당기기 설비별 점유비율은 ’17년 발전설비 경상정비 연구용역 결과서에 준함

다. 출력제한운전 벌과금

[해당 설비 경상정비 연간 계약금액÷2] × [출력제한운전시간÷720] × [출력제한용량÷정격설비용량]

라. 발전정지 벌과금

[(해당 설비 경상정비 연간 계약금액÷2)×(발전정지시간÷720)]＋[고장정지 후 재기동 완료시까지 소요되는 직접경비(용수, 전기, 연료)]

단, 재기동 완료라 함은 계통병입 시각을 말한다.

마. 2항 다, 라에 의한 연간 배상금의 누적액은 해당설비의 연간 계약금액의 20%를 초과하지 않는다.

③ 지체상금 적용 시 착수 및 작업기간 지연은 발주자가 통보한 착수일자 및 기간을 기준으로 하며, 정비대상설비가 2개 호기 이상의 발전설비에 관련된 공용설비일 경우에는 동 호기들의 연간 평균 정비계약금액을 기준으로 계산한다. 발주자의 사유로 계약상대자의 정비업무 착수가 지연된 경우에 발주자는 지연된 기간만큼 준공예정일을 조정하여야 한다. 다만, 발주자의 통보 내용이 명백히 부당할 경우 계약상대자는 이의를 신청할 수 있으며, 이의 사항은 제23조에서 정한 운영위원회의 결정에 따른다.

④ 작업지연, 출력제한 및 고장정지의 원인이 천재지변 등 불가항력적이거나 계약상대자의 귀책사유가 되지 않는다고 발주자가 인정한 때에는 제9조 2항 ②호에 대한 책임을 면할 수 있다. 다만, 정비원 교육부실 및 정비작업 준비 부실 등 계약상대자의 태만으로 작업이 지연되었다고 인정될 때에는 책임을 면제하지 아니 한다.

⑤ 계약상대자가 제3조 ①항의 업무에 관련된 사항을 정당한 사유 없이 소정기간 내에 제출하지 아니하거나 검토주기 지연 등이 발생하는 경우, 발주자는 제9조 2항 ②호 “나” 에 정한 지체책임을 부과할 수 있다.

3. 계약상대자는 발주자의 통보에 따라 시행된 작업지시서, 예방점검 및 예방정비 작업 중 작업절차 미준수에 의한 벌과금부과, 작업자의 귀책으로 인한 설비고장, 파손 발생시 및 작업 후 하자사항이 발생하였을 경우에는 발주자가 통보한 기일 내에 계약상대자 부담으로 정비를 완료하여야 한다.

4. 계약상대자가 하자정비시 발주자 보유자재를 사용하였을 경우 계약상대자는 현물 또는 발주자의 재조달 가격으로 변상하여야 하며, 발주자는 공사대가에서 이를 우선 공제할 수 있다.

5. 발주자는 계약상대자의 계약업무와 관련하여 필요 시 업무수행 실태와 당해 계약금액을 구성하는 지입재료비 및 경비비목의 적정이행 여부에 관하여 확인할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 필요한 제반자료 제공에 협조하여야 하며, 지적사항은 발주자 관련 부서의 통보에 의하여 시정조치를 취하여야 하며, 그 결과를 발주자 관련 부서로 서면 제출하여야 한다.

제10조 (손해배상)

1. 지체상금 적용 시 착수 및 작업기간 지연은 발주자가 통보한 착수일자 및 기간을 기준으로 하며, 발주자의 사유로 계약상대자의 정비업무 착수가 지연된 경우에 발주자는 지연된 기간만큼 준공예정일을 조정하여야 한다. 다만, 발주자 통보내용이 명백히 부당할 경우 계약상대자는 이의를 신청할 수 있으며, 이의사항은 운영위원회의 결정에 따른다.

2. 계약상대자의 귀책사유로 인하여 중대고장 발생시 계약상대자는 제9조 제②호에서 정한 자금보충액이 아닌 손해배상예정액(실 전력판매 손실금액)으로 배상하여야 하며, 이와 관련된 사항은 경상정비심의원회의 결정에 따른다. 중대고장이라 함은 발전설비가 5일 이상의 발전지장을 초래한 고장을 말한다. 단, 상기의 중대고장에 의한 연간 배상금의 누적액은 해당 설비의 연간 계약금액의 20%를 초과하지 않는다.

3. 작업지연, 출력제한 및 고장정지의 원인이 천재지변 등 불가항력적이거나 계약상대자의 귀책사유가 되지 않는다고 발주자의 사업소장이 인정한 때에는 전항의 책임을 면할 수 있다.

4. 계약상대자가 하자정비 시 발주자 보유 자재를 사용하였을 경우 계약상대자는 현물 또는 발주자의 재조달 가격으로 변상하여야 하며, 발주자는 사업대가에서 이를 우선 공제할 수 있다.

5. 발주자는 계약상대자의 계약업무와 관련하여 필요시 업무수행 실태와 당해 계약금액을 구성하는 지입재료비 및 경비비목의 적정 이행여부에 관하여 확인할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 필요한 제반자료 제공에 협조하여야 하며, 지적사항은 발주자 관련부서의 통보에 의하여 시정조치를 취한 후 그 결과를 발주자 관련부서로 서면 통보하여야 한다.

제11조 (교육)

1. 계약상대자는 발주자 직원 용역기술능력 향상을 위해 연간교육 계획을 수립하여 발주자의 승인을 득하여야 하며, 연간 2회 교육을 시행하고, 발주자의 추가 교육의 요청에 응하여야 한다.

2. 계약상대자는 내실있고 반복적인 교육훈련을 통해 정비원의 기량이 지속적으로 향상되도록 노력하여야 한다.

3. 계약상대자는 연간교육계획을 수립 시행하여야 한다. 연간교육계획 수립 및 시행 시에는 발주자의 의견을 수렴하여 정비품질향상에 필수적인 사항이 포함되도록 하여야 한다.

4. 계약상대자는 업무에 지장을 초래하지 않도록 교육대상자를 선발, 시행하여야 한다.

제12조 (자재관리)

1. 용역업무 수행시 사용되는 장비, 공구, 자재는 발주자측이 제공함을 원칙으로 한다. 계약상대자가 인수하여 사용한 자재, 공기구의 사용내역은 용역수행일보에 기록하여야 한다.

2. 계약상대자는 경상정비에 사용되는 모든 장비, 공구, 자재는 발주자의 승인을 득한 이후에 반입, 반출한다.

제13조 (경상정비 용역비 적용)

1. 소요 용역비는 확정분과 실적 정산분으로 한다.

2. 실적 정산분은 초과근무, 직접경비(도서인쇄비), 출장비, 안전관리비 등 당해 사용한 금액의 실비 정산을 위해 각 항목은 사용내역서를 분기별 기성고 제출 시 첨부하여야 한다.

3. 지급임차료는 용역수행에 필요한 계약상대자의 현장사무실 및 기타 기계기구 등의 임차료로서 정산시 지급 임차료로 인하여 발생되는 일반 관리비 및 이윤은 지급하지 아니한다. 계약상대자가 동 용역수행에 필요한 현장사무실 등을 발주자로부터 임차할 경우에는 발주자와 임대차계약을 체결하여야 하며, 임대한 건물에 사용되는 전기 등은 발주자가 제공하는 것을 사용하고 발주자가 별도의 계약 또는 계량기로 측정하여 사용료 청구 시 실적 정산한다.

4. 근무시간은 발주자의 근무시간에 따르며, 발주자의 요청으로 수행한 초과근무에 대하  여 계약단가에 의거 실적정산한다.

5. 용역대가의 산정은 엔지니어링 기술진흥법 제 10조 2항의 규정에 의한 “엔지니어링 사업대가의 기준” 제4조 1항(지식경제부 고시)의 실비정액가산방식을 준용한다.

6. 직접인건비는 당해 업무에 직접 종사하는 기술자의 급여, 제수당, 상여금, 퇴직적립금,  산재 보험금 등을 포함한 것으로써 “엔지니어링 사업대가의 기준”의 산업공장 분야 기술자의 등급별 단가를 준용한다.

7. 실적 정산분은 발생한 분기별 기성고 청구 시 첨부하여 제출한다.

제14조 (경상정비 업무 수행절차)

1. 계약상대자는 용역의 모든 역무수행과 관련하여 발주자에게 사전 통보 및 승인을 득한 후 수행하여야한다.

2. TM[별표-2]에 의한 정비는 [별표-1]의 절차에 의거 수행하는 것을 원칙으로 하되, 발주자의 사업소에서 정한 기준 또는 절차서 등에 따라 변경할 수 있다.

3. 발전정지를 유발할 수 있거나, 출력감발 또는 정상운전에 지장을 초래할 수 있는 기기의 정비업무 수행 시에는 사전에 관련도면, 지침서 및 절차서 등을 참고로 작업 계획을 수립하고 반드시 발주자의 작업 허가를 득한 후 수행하여야 한다.

4. 계약상대자는 모든 정비업무 수행 시 선임자를 임명하여 신속, 정확한 업무수행이 이루어지도록 하여야 하며, 작업 전에 안전작업수칙을 주지시켜야 한다.

5. 주기적 예방점검에 의한 경상정비는 "경상정비 일반기준"에 따라 설비 및 주기별로 점검표를 작성하여야 하며, 대상설비 및 주기는 특성에 따라서 발주자와 협의 조정할 수 있다.

6. 계약상대자는 발주자 측의 운전과 정비에 관련된 지침서 등을 참고로 경상정비계획서 및 절차서를 작성하여 승인을 득한 후 활용하여야 한다. 절차서는 설비별, 기기별로 점검, 정비, 교정 및 시험 등 방법과 절차가 포함되어야 한다.

7.	계약상대자는 설비의 점검 및 정비를 위한 기기조작 안전꼬리표(TAG) 발행 및 처리는 발주자가 정한 절차를 준용한다.

8. 계약상대자는 본 역무수행중 시설 및 인명사고가 발생할 경우 즉시 그내용을 발주자에게 구두보고하고 상세한 보고서는 발주자가 요구하는 시간이내에 서면으로 제출해야 한다.

9. 발주자는 발전설비 안정운영을 위해 긴급정비가 필요하다고 판단되면 계약상대자에게  구두로 우선 정비수행을 요청하고 사후에 작업지시서를 발행하여야 하며, 계약상대자는  최대한 신속히 대응조치를 취하여야 한다.

10. 일상, 주간, 월간, 분기, 반기 및 연간 등의 주기적 예방점검, 정비는 발주자의 점검표에 의거 점검, 정비를 수행하여야 하며, 그 결과물은 익월 10일이내에 발주자에게 제출하여야 한다.

11. 계약상대자는 용역수행일보를 작성하여 매일 발주자에게 제출하여야 하며,  용역진도보고서는 월간, 분기, 연간으로 구분하여 작성하여 제출한다.

제15조 (용역수행결과서 및 관련서류)

1. 계약상대자는 정비역무수행과 관련하여 다음 각 호의 서류를 분기별 기성검사 요청 시 제출하여야 하며, 발주자는 기성고 검사 시 이의 이행여부를 확인하여야 한다.

가. 기성(준공)검사원(별표-4)

나. 기성(준공)감독조서(별표-5)

다. 기성내역서(별표-6)

라. 일일업무일지(별표-7)

마. 인력별 실적정산 확인서(초과근무 확인서 등)

바. 용역진도보고서(작업수행내역 기록)

사. 기타 실적정산 분 증빙서류

아. 기타 발주자가 요청하는 서류

2. 계약상대자는 역무수행 내용이 상시 파악될 수 있도록 최소한 다음 각 호의 기록을 현장에 비치 운영하여야 하며, 기록대장 보존기간은 발주자와 협의하여 결정한다.

가. 기기점검 수리의뢰서 발행 및 처리대장

나. 기기조작 안전꼬리표 발행 및 처리대장

다. 기타 발주자가 지정하는 주요기기의 운전 및 조작사항 등

제16조(기성대가의 지급 및 공제)

1. 발주자는 계약금액을 월 단위 용역기간으로 나눈 금액을 계약상대자의 지급요청에 따라 매월 또는 분기별 기성고 검사 후 대가를 정산 지급한다. 단, 계약상대자는 지급요청을 매월 종료일을 기준으로 하여 10일이내에 요청한다.

2. 발주자는 계약금액에 대한 공제사유가 발생하였을 때에는 계약상대자에게 지급할 타 지급금에서 이를 공제할 수 있으며, 지급금이 없을 경우 계약상대자는 발주자가 정한 소정 기일까지 해당금액을 발주자에게 납부하여야 한다.

3. 계약상대자의 정비지연 및 정비품질의 문제발생 우려 등으로 발주자의 손실이  명백히 예상될 경우 발주자는 해당업무 일부를 제3자에게 시공하게 할 수 있으며, 이에 따른 비용을 계약금액에서 공제한다.

4. 계약상대자는 발주자의 사전 승인 없이 역무수행을 중단하여서는 아니 되며, 중단하였을 경우 대가는 다음에 준하여 산출한 금액으로 기성고 또는 준공정산 지급 시 공제한다.

- 평일작업의 경우 : (연간계약확정금액÷연간계약일수)×작업 중단일수×110%

- 초과근무의 경우 : 초과근무시간계약단가×작업 중단시간×110%

5. 신규 또는 기존 발전설비의 착공 또는 준공시기 변경, 기존설비의 폐지, 휴지, 보존   또는 제3자 위탁운영 등으로 인한 대상설비 변경, 기간 변경 또는 기타의 사유로 계약 내용 변경 시는 계약금액을 조정하여 지급한다.

6. 계약상대자의 노동쟁의로 인하여 역무수행에 지장을 초래할 경우 노동파업기간은 동 용역기간에서 제외되며, 동 기간의 위탁운영비는 일수로 계산하여 기성고 지급 시 감액한다.

제17조 (환경관리)

1. 발주자는 환경관련법에 의한 인·허가, 법정보고, 법정분석 등 모든 대관업무를 이행하여야 하며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다. 단, 계약상대자의 귀책에 의해 발주자에게 부과되는 배출부과금 및 행정처분(벌금, 과태료, 법적책임 등)에 대해서 계약상대자가 책임을 진다.

2. 계약상대자는 용역수행 과정에서 발생되는 폐기물을 폐기물관리법에 정한 방법대로   분리수거하여 발주자가 지정하는 장소에 보관하여야 하며, 보관된 폐기물은 발주자가  처리하되, 기타 세부적인 사항은 발주자에서 정한 바에 따른다.

제18조 (안전관리 및 재해예방)

1. 계약상대자는 당해용역 수행 장소에서 안전에 관한 관련법령을 준수하여야 한다.

가. 계약상대자는 용역업무 수행상의 모든 안전사고에 대한 책임이 있으며, 따라서 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 적극 노력하여야 한다.

나. 계약상대자는 안전관리자를 선임하여 발주자에게 명단을 제출하고, 안전관리자는   그 의무를 성실히 수행하여야 하며 투입인력은 안전관계 법규를 준수하여야 한다.

2. 계약상대자는 업무수행 중 계약상대자의 귀책으로 발생한 화재, 도난, 유실, 손상과   계약상대자의 하도급자의 종업원 또는 고용원의 안전에 관한 모든 책임을 진다.

3. 천재지변(태풍, 해일, 폭우 등) 및 돌발사고로 인한 재해의 예방․복구를 위하여 발주자가 지시하는 사항에 최대한 협조하여야 하며, 외부인력 및 장비의 동원이 필요한 경우 이에 소요되는 비용은 발주자가 부담한다.

4. 계약상대자는 당해용역 수행 시 인명 안전사고 예방을 위하여 제반 안전교육을 실시하고 안전장구를 착용 후 업무에 임하여야 한다.

5. 계약상대자는 설비운전에 따른 위험요소를 사전에 제거하고 설비안전사고를 예방하기  위한 적절한 조치를 취하여야 한다.

6. 계약상대자는 안전관리비를 현장 근로자의 산업재해 및 건강 장해예방에 사용하고 그  사용내역서를 작성․보존하여야 한다.

7. 발주자는 계약상대자에게 받은 안전관리비 사용내역서를 검토하여, 안전관리비의 목적  외 사용분에 대해서는 감액 조치할 수 있다.

8. 계약상대자는 모든 근로자에게 보안사항을 준수토록 교육한다.

제19조 (하도급) 당해용역의 운전 및 정비기술 축적과 부실용역 방지를 위하여 직영을 원칙으로 하되, 부득이하게 하도급시에는 발주자의 승인을 득하여야 하고 발주자의 승인불가 또는 수락불가 통보 시 하도급을 시행하여서는 아니 된다. 기타 하도급 관련사항은 계약일반조건 및 관계법령에 따라야 한다.

제20조 (일할계산 및 단수 계산방법)

1. 시행일은 역월을 기준으로 계산하고 1일은 월의 대ㆍ소에 관계없이 1/30로 계산한다. 단, 일수 미만의 단수는 절사한다.

2. 금액의 원미만은 절사한다.

제21조 (계약의 연속)

1. 동 계약과 관련하여 차기 계약이 지연되는 등 특별한 사유가 발생할 경우에는 계약기간이 만료되었다 하여도 발주자의 별도 통보가 없는 한 계약상대자는 차기 계약 시까지 동 업무를 계속 수행하여야 한다.

2. 계약만료일이 계획예방정비용역 기간 중일 경우, 동 용역 완료시까지 계약기간을 연장할 수 있다.

3. 제1항의 사유로 발생되는 용역비는 정산하여 지급한다.

4. 차기계약으로 인계인수가 필요한 경우 계약상대자는 3개월 이내에 발주자로부터 제공받은 운전, 정비자료와 설비이력사항을 포함한 업무 인수인계를 완료 하여야 한다.

제22조 (인력 및 복무관리)

1. 계약자의 통상근무일 및 근무시간은 발주자의 통상근무일 및 근무시간에 준하여 시행한다.

2. 아래와 같은 경우 통상근무로 인정한다. 계약자 현장대리인은 아래사항 발생 시 정비품질에 영향이 없도록 발주자와 사전협의를 하여야 한다.

가. 역무 수행에 필요한 출장

나. 역무수행에 필요한 각종 교육훈련(대외 위탁교육 포함)

다. 민방위기본법 또는 향토예비군 설치법에 규정한 훈련기간

라. 법률의 규정에 의한 투표에 참가하는 경우

3. 아래와 같은 경우 발주자는 유급휴가로 인정한다.

가. 주휴일

나. 근로자의 날(5월 1일)

다. 법정 공휴일(월력상 빨간 공휴일)

라. 정부가 정한 임시 공휴일

마. 회사 창립 기념일 및 노조 창립일

(단, 사전에 발주자와 사전협의 후 시행한 사항에만 인정한다.)

바. 회사 사규에서 인정한 개인별 연차 휴가

(단, 사전에 발주자와 사전협의 후 시행한 사항에만 인정한다.)

사. 회사 사규에서 인정한 경조사

(단, 사전에 발주자와 사전협의 후 시행한 사항에만 인정한다.)

4. 계약자 현장대리인 3일초과 휴가 시 계약상대자는 충분한 경험과 기술력을 갖춘 대체  인력을 제공하여야한다.

(단, 사전에 발주자와 사전협의 후 시행한 사항에만 인정한다.)

제23조 (운영위원회 운영)

1. 정비 및 운전업무상 발생하는 분쟁을 예방 또는 조정하고 동 업무 수행의 능률화를   하기 위하여 발주자와 계약상대자간에 운영위원회(이하□위원회□라 한다)를 구성∙운영 한다.

2. 위원회는 다음과 같이 구성∙운영한다.

가. 위원장 : 발주자 운영본부장 (또는 해당 직무 수행자)

나. 위  원

(1) 발 주 자 : 경상정비 및 운전관련으로 위원장이 지정하는 자로서 2인 이내의 직원

(2) 계약상대자 : 사업소장 및 사업소장이 지정한 직원

3. 위원장 유고 시는 위원장이 지정한 위원이 위원장 직무를 대행한다.

4. 위원이 출석할 수 없어 차하위직 직원을 지정한 때에는 그 직원이 출석하여 의결할      수 있다.

5. 위원회는 심의결과 제시된 의견을 회의록[별표-3]으로 작성하여 유지관리  하여야 한다.

6. 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의∙의결한다.

가. 경상정비용역 및 운전역무 수행 중 발생하는 분쟁사항의 조정

나. 경상정비용역에서 제외되는 업무 중 용역의 시행대상 심의

다. 주요 작업사항의 항목 및 공기 조정

라. 계약상대자의 귀책에 의한 배출부과금 및 행정처분(벌금, 과태료, 법적책임등) 관련        사항

마. 기타 정비 및 운전과 관련된 사항 등

바. 계약조건에 기술하지 않은 사항 또는 문구해석이 상이한 경우 협의 결정

7. 위원회는 재적위원 2분의 1이상 출석으로 성립하며, 재적위원의 과반수 출석에 출석  위원 과반수 찬성으로 의결한다.

8. 위원은 특별한 사유가 없는 한 위원회에 출석하여 의결하여야 하며, 제9항에서 정한  재심청구가 있을 때에는 재적위원 2/3이상의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 결 정한다.

9. 발주자와 계약상대자가 위원회 결정에 이견이 있을 때에는 그 사유를 명확히 하여 위원회에 재심을 청구할 수 있다. 다만, 재심청구는 1회에 한한다.

10. 발주자와 계약상대자는 위원회의 최종 결정내용을 존중하여야 한다. 위원회 구성 등 기타 세부적인 사항은 발주자 및 계약상대자 사업소의 조직과 실정에 맞게 세부절차를 작성, 운영할 수 있다.

【별표-1】

기기점검수리의뢰(TM)에 의한 정비업무 처리절차

						TM 발행 (발주자,운전부서)						- 현장확인, TAG 발행
												- 작업시기, 결정(즉시,수시,정지)
							□
						TM 회의 (발주자,계약자)						- 안전 및 지시사항 기록
												- 작업완료예정일 결정 및 기록
							□
						TM 접수 (계약상대자)
							□
						작업계획수립						- 발주자 : 사급자재 수배 또는 자재지입 통보
												- 계약상대자 : 인력, 공구 및 작업절차서
							□
			필	요		작업허가
		□						불
	작업허가 (발주자)							필
								요
							□
					➡	작업착수				□
							□
						작업종료
							□
						확 인
											불량
							양	호
							□
						기록정리						- TM 대장(사업소 실정에 맞게 관리)
												- 기기이력카드

【별표-2】

기기정비 작업의뢰서(TM)

DATE : 20   /   /

TM발행번호				-		발행부서							발행일자						처리상태
호 기						담당부서							정비부서						우선순위
TRIP관련						기기식번							설치위치						기기규격
기기명													TAG NO						조작승인
정비조건						결함형태							결함부위						품질등급
의뢰내용
RED TAG						협조부서													정비절차
안전지시
품질시방
정비내용
정비결과
작업결과						결함발생							완료예정						변경일자
설계공량						실적공량							이력기록						정 비 자
정비지연사유													미결원인						결함원인
조치내용
정 비 소 요 자 원
번호	구분		자원식별번호				소요자원명									단위/인원				수량/공량			사급/지일
1
2
3
4
5
운전부서(발행) 감독부서(설계) 정비(부서)회사
		발행자			팀장					담당		팀장					담당				팀장
		운전부서(확인)								감독부서(종결)
		담당			팀장					담당	팀장

【별표-3】

운영위원회 회의록

1. 심의 일시 및 장소 :

2. 심 의  안 건  명  :

3. 안 건 내 용 요 약 :

4. 심   의   결   과 : (조정내용 등 심의결과 요약)

5. 심   의   위   원

성 명	의견여부	서 명	성 명	의견여부	서 명

※ 불참자는 불참으로 표시

6. 회 의 내 용 : 붙임 참조

【별표-3-1】

(을)

회 의 내 용

【별표-4】

기 성(준공)검 사 원

1. 계약명 :

2. 계약금액:

3. 준공(기성)금액:

4. 계 약 일:

5. 착 수 일:

6. 준공예정일:

7. 기성기준일(실 준공일):

8. 현재공정:

위 용역의 도급시행에 있어서 용역전반에 걸쳐 설계서, 계약문서 및 기타 약정대로 어김없이 (기성, 준공)되었음을 확인 하옵기 이에 (기성, 준공)검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202  년  월  일

계약자 :

주  소 :

상  호 :

대표이사:            (인)

첨부 : 1.기성(준공) 감독조서.

2.기성(준공) 내역서.

3.인력별 실적정산 확인서 1부.

(주)에스이그린에너지 대표이사 귀하

【별표-5】

기 성(준 공) 감 독 조 서

1. 계약명 :

2. 계약금액:

3. 준공(기성)금액:

4. 계 약 일:

5. 착 수 일:

6. 준공예정일:

7. 기성기준일(실 준공일):

위 용역의 감독원으로 임명받아   년   월  일부터    년   월   일까지 계약수행을 감독한 결과 용역전반에 걸쳐 설계서, 계약문서 및 기타 약정대로 어김없이 전용역의   %가 기성(준공)되었음을 인정함.

202  년  월  일

감 독 원:         (인)

(주)에스이그린에너지 대표이사 귀하

【별표-6】

기 성 내 역 서

1. 용역계약서 번호:

2. 용   역  명 :

3. 용 역 기 간 :

4. 용 역 금 액 :

구분		금액(원)	구성비(%)	비고
계약 확정분	직접인건비
	제 경 비
	기 술 료
	소 계
실적정산분
계
부가가치세
합 계

【별표-7】

일 일 업 무 일 지 202 년 월 일 요일			결재	담당		팀장
구분	분야	내용			M/H		근무시간
금일 업무
명일 업무
O/T	지시내용				확인
	작업내용
	작업시간

□인원 현황

총  원:   명

현재원:   명        기계 : 000, 000, 000

전기 : 000, 000,  제어 : 000

업체명 : 000              현장대리인 : 000 (인)

Ⅲ. 과업 내역서

1. 에스이그린에너지 발전시설 개요

1. 주소 : 경기도 화성시 장안면 화곡로 280-50

2. 대지면적 : 6,844㎡

3. 건축물 : 관리동/전기실동 외 부대시설

4. 발전설비 : 연료전지 19.8MW(300kW×66기) 발전 및 부속설비

2. 경상정비 배치인원 및 자격

1. 배치인원 : 전기기술자 1명

2. 기술자격 : 고급기술자 이상

3. 경상정비 용역범위

1. 연료전지를 제외한 부속설비(송전선로 포함)의 주기적 예방점검, 예방정비 수행과 작업 의뢰서 및 고장수리 의뢰서(TM) 처리

2. 설비 고장의 돌발복구 및 지원

3. 용역 안전관리 및 보안관리

4. 경상정비에 필요한 자재의 관리

5. 발주자에 대한 정기적인 용역업무 및 계획, 진행사항 보고, 정비 작업 전후 정리정돈, 청소

6. 연료전지를 제외한 경상정비에 필요한 공구, 계측기 및 발전소 시설전반에 대한 운영과 유지보수 관리

7. 발주자가 동 용역과 관련하여 통보하는 모든 제반 업무

8. 도시가스 정압기

- NG Gas Leak 점검

- 경보기 점검 등

- 가스정압기 점검 등 업무지원

9. 품질관리 및 정비기술 관리

- 정비관련 절차서 작성 및 이에 따른 정비

- 정비작업 후 작업 기록 및 유지

- 정비기술 개선 및 기록 유지

- 품질보증계획서 및 품질관리 절차서에 따른 품질관리 관련 업무

10. 연료전지를 제외한 설비에 대한 법정검사(인허가 등) 업무지원

11. 소방설비 작동기능점검 업무지원

12. 22.9kV 송전선로 수목 가지치기 작업(연 1회)

- 4~5월 중 시행(용역계약기간 중 총2회 시행)

13. 22.9kV 송전선로 맨홀 점검(연 1회)

- 10~11월(1회) 시행(용역계약기간 중 총2회 시행)

- 송전선로 맨홀 점검 시 양수작업, 열화상 검사 포함

- 조암변전소 내 케이블점검, 열화상 검사 포함

14. 발전소 내 수목 정리

- 발전소 내 수목 정리 및 제초 작업(연 1회), 제초제 살포(연 2회)

※ 발전소 내 울타리 부분 잡초 제거 포함

15. 기타 발주자 요청 시 업무 지원

16. 전기안전관리자 직무고시 이행

- 전기안전관리자 직무고시에 명시된 주기별 점검항목 측정 및 시험

○ 점검 종류 및 시험항목, 주기는 아래 표 참조

○ 전기안전관리자 직무고시 기록서식으로 제출(대체 가능한 양식도 가능)

※ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제3조(안전규정의 작성)

※ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제4조(점검주기 및 점검횟수)

4. 공기구 및 계측기

1. 본 용역업무 수행시 사용되는 자재 및 공기구, 계측기는 발주자측이 제공함을 원칙으로 한다.

2. 계약상대자는 자재 및 공기구, 계측기 관리업무를 수행한다.

5. 법정검사 및 기술지원 업무

1. 전기안전공사, 가스안전공사, 산업안전보건공단, 환경보건공단 등 발전설비 운영에 관계기관의 법정검사 시 기술지원 및 업무협조

2. PSV Test 및 전기설비 열화진단 등 별도 외주처리 업무에 대한 기술지원 및 업무협조

3. ㈜에스이그린에너지에서 발주한 용역(가스, 소방, 전기 등) 업무에 대한 기술지원

6. 기술행정 및 품질관리, 안전관리, 교육업무

1. 기술행정절차서 및 정비절차서 작성제출(COPY, 전자파일) 및 운영

2. 안전관리계획 제출 및 실행

3. 발주처의 용역업체 관리업무 및 기술지원 업무

4. 직무, 안전등 업무와 관련된 교육계획 제출 및 실행

5. 품질보증계획서 및 품질관리 절차서 제출 및 실행

7. 업무공간 및 사무집기

1. 용역수행에 필요한 현장사무실은 발전소 내에 위치하며 발주자가 현장사무실을 제공 시 발주자와 임대차계약을 체결하여 사용한다.

2. 임차한 현장사무실에 사용되는 전기는 발주자와 별도의 계약 또는 계량기로 측정하여 사용료를 지불한다.

다. 전화, 인터넷 또는 업무에 필요한 테이블 및 전산장비, 사무용품 및 업무수행에 필요한 소프트웨어 등은 경상정비업체가 자체조달 및 관리한다.

라. 계약상대자는 용역범위 내 돌발상황 발생에 대비하여 즉각 조치가 이루어지도록 해야 한다.

8. 경상정비 주요설비

1. 기계설비

1) City Water System

2) NG Governor System

3) 각종 Valve, 계측기류 점검

4) 기계설비관련 계측 및 제어 부속설비

5) 냉난방 설비

2. 전기설비

1) 22.9kV 송전선로 및 저압 인입선로

2) STEP-UP 22.9kV TR 4.5MVA*7대 및 부속시설

3) Aux 3800V TR 400kVA*2대 및 부속시설

4) 전기실내 HV/LV/MCC/MOF/AVR 등

5) MCC PANEL 및 현장 LOCAL PANEL (FAN, 소방설비, 기계설비)

6) UPS & BATTERY CHARGER PANEL

7) HEAT TRACING PANEL

8) 분전반 PANEL

9) 각종 케이블

10) 전기설비관련 계측 및 제어 부속설비

3. 도시가스설비

1) 각 호기별 Metering Panel (Filter, 가스유량계, 차압계, 압력계)

2) 계측설비

- 가스부피환산장치, 압력트랜스미터, 차압트랜스미터, 온도트랜스미터 등

3) 가스누설경보시스템(가스감지기 & 수신반)

4. 계측/제어설비

1) PLC & HMI SYSTEM

2) 냉방시스템 & 흡/배기 FAN 제어판넬

5. 송전설비

1) 22,900V / 길이=4768.8m[지중3538.5m + 전력구 102m + 가공 1128.3m (CP주 35본, 맨홀 17개)

6. 기타설비

1) CCTV

2) 보안등 시스템

3) 소방시설

4) 전기방식 설비

9. 예방점검 및 정비 & 기타 업무

1. 연간 예방점검 계획 수립 및 실행

- 설비별 연간/반기/분기/월간/주간 계획 수립 및 실행

2. 일상점검 기록관리 및 처리

- 일상점검 수행기록 및 주간단위로 보고

3. 도시가스/소방설비의 하도급 시 계약체결 및 용역관리

4. 자재창고 설비성자재, 소모성자재, 안전용품, 공기구, 계측기 자재관리 업무

5. 계측기 검/교정관리 지원업무

6. 돌발사고 및 결함사항관련 유지보수 및 개선업무

7. 기타 발주처의 협의된 업무.  끝.